Bydgoszcz, dnia 10.09.2010r.

Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż formy do wibroformowania
Nr postępowania:   AZZP-B.24-128/2010;     Ogłoszenie nr 242393-2010 z dnia  06.09.2010 r. (BZP)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 10.09.2010r. o następującej treści:
Pytanie:
 	W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu, proszę o przedstawienie możliwości wydłużenia terminu realizacji do 7 – 8 tygodni od daty podpisania umowy.
	Wyjaśnienia: Obecnie proponowany termin wykonania przypada na 15 listopada 2010. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przedstawioną  przez Państwa Specyfikacja przetargową podpisanie umowy może nastąpić najpóźniej do 30 dni od daty złożenia oferty czyli do dnia 14 października 2010. Wynika stad, że czas pozostały na realizację zamówienia  wynosi 4 tygodnie, natomiast czas oczekiwania na konieczne do produkcji formy komponenty i podzespoły wynosi właśnie 4 tygodnie Stąd nasz wniosek przedłużenie terminu realizacji.
Odpowiedź:
	Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając  termin  wykonania zamówienia na 29 12.2010r.